109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 완주군에서 ‘20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위:백만원,%)

사업명	총사업비	집행액		향후소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후
완주소셜굿즈 혁신파크조성	5,000	-	1,000	4,000	4,000	2021	2020	40
완주야구장 조성사업[재심사]	4,900	3,000	1,900	-	-	2020	2020	100
이서혁신도시 건강생활지원센터조성	2,910	-	2,910	-	-	2021	2020	20
상관도시재생뉴딜사업 (우리동네살리기)	7,630	-	1,836	3,333	2,461	2022	2020	30
산림에너지자립마을조성사업	4,439	13	2,146	2,280	-	2021	2020	20
2020전라북도 사회적경제박람회	100	-	100	-	-	2020	2020	미개최
와일드&로컬푸드축제	132	-	132	-	-	2020	2020	미개최
완주군민의날	120	-	120	-	-	2021	2020	미개최
완주군새마을회관건립	2,500	130	690	1,480	200	2023	2020	15
완주군교육지원센터조성	5,200	-	-	1,000	4,200	2022	2020	10
완주테크노밸리제2일반산업단지 연구용지매입	22,600	-	-	300	22,300	2024	2020	10
완주소셜굿즈 혁신파크조성[재심사]	5,900	-	1,300	3,300	1,300	2021	2020	40
완주로컬푸드 부가가치발효산업 육성사업	3,000	-	-	700	2,300	2024	2020	40
완주군보은매립장침출수 방재시설설치사업[재심사]	9,800	1,000	3,100	5,700	-	2021	2020	60
용진설경~두억 도로확포장공사[재심사]	5,200	100	500	300	4,300	2023	2020	20
이서제남선도로 확포장공사[재심사]	5,300	600	500	200	4,000	2023	2020	20
구이저수지둘레길조성사업	3,000	-	1,200	1,000	800	2023	2020	15
어린이안전교육 종합체험관조성[재심사]	3,900	600	-	700	2,600	2023	2020	15

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2020년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 ‘20년말 기준으로 작성

10-1-1.개별투자심사사업의추진현황

사업명

완주 소셜굿즈 혁신파크 조성

담당자

일자리경제과

오상혁(☎290-2483)

□ 사업목적 및 필요성

○ 양질의 사회적 일자리를 창출하고 포용성장을 견인하는 사회적 경제 활성화(국정과제 26번)를 위한 혁신 집적 공간 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 5월 ～ 2021년  5월(12개월)

○ 위 치 : 완주군 삼례읍 삼례리 182번지 일원(삼례중학교)

○ 규 모 : 부지 23,744㎡,  리모델링 건물 6개동/연면적 4,553㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,000		1,000	2,000	2,000
국 비
시 도 비
시군구비	5,000		1,000	2,000	2,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 수요자 중심의 공간구성을 위한 공간기획단 운영      : ‘21. 1월 ~ 3월

○ 원가심사 및 공사 발주                              : ‘21. 6월말

○ 공사계약 및 착수                                   : ‘21. 7. 30.(금)

○ 소셜굿즈센터 임시이전(삼례중→우석대)               : ‘21. 8. 10.(화)

□ 향후계획

○ 관급자재 요청 및 공사 추진                         : ‘21. 8월 중

○ 운영조례 제정 및 입주자 모집공고                   :′21. 8월~11월

○ 공사완료 및 운영                                : ′21. 12월

사업명

완주군 야구장조성사업

담당자

체육공원과

강준호(☎290-2633)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경쟁력 있는 인프라 구축과 군민체육진흥으로 여가스포츠를 통해 완주 군민들의 건전한 여가활동과 문화체육 욕구를 해소함으로써 군민의 삶의 질을 향상시킬 수 있는 체육시설 조성

○ 야구 동호인, 족구 동호인 활동 및 완주군 인구의 지속적인 유입에 따른 체육시설 수요를 충족하고, 시설의 다양화를 통해 주민들의 이용에 편리함을 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년  1월 ～  2020년 12월

○ 위 치 : 2017년  1월 ～  2020년 12월

○ 규 모 : 정식규격 야구장 조성 1면(39,534㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,900	3,000	1,900
국 비	780	200	580
시 도 비
시군구비	4,120	2,800	1,320
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

◦ 공유재산 관리계획 반영                                : ‘16. 11월

◦ 실시설계 용역                               : ‘18. 04월 ∼ ’20. 4월

◦ 군관리계획(체육시설) 결정                             : ‘18. 06월

◦ 군계획시설 실시계획 인가 등 행정절차 이행     : ‘20. 02월 ∼ 04월

◦ 공사착공 및 준공                               : ‘20. 04월 ∼ 12월

사업명

이서 혁신도시 건강생활지원센터건립

담당자

보건관리과

김은영(☎290-3007)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2018년부터 “공중보건의사제도 운영지침”에 의거 혁신도시 소재  이서보건지소 의과 공중보건의사 미배치로 진료 및 예방접종 등의 운영이 불가하여, 2020년 이후 폐쇄되는 이서보건지소를 기능 전환 후 대체 신축하는 공공보건시설로 지역주민의 질병예방, 건강증진 등 소생활권에 지역보건의료의 차원 높은 건강증진서비스를 제공하여 주민 삶의 질을 향상.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ～ 2022년(3년)

○ 위 치 : 완주군 이서면 상개리 580-6번지 외 1필지

○ 규 모 : 신축 : 1개소(847㎡)

- 부지면적 A = 2,536㎡ (사유지)

- 연 면 적 A = 847㎡(지상1층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,910백만원

(단위:백만원)

구분	계	집행액		향후소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년이후
계	2,910			2,910
국비	1,030			1,030
시도비	260			260
시군구비	1,620			1,620
지방채
민간자본
기타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 지방재정 투자심사                              : 2020년 2월

○ 기본 및 실시설계 용역 시행                     : 2021년 6월

○ 기본설계 심의 신청(한국건강증진개발원)          : 2021년 8월

□ 향후계획

○ 이서 건강생활지원센터 준공                     : 2022년 9월

사업명

상관 도시재생 뉴딜사업

(우리동네 살리기)

담당자

도시개발과

정장록(☎290-2889)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 구도심의 도시경쟁력을 강화하고 주민공동체 역량강화를 통한 자발적이고 지속가능한 도시육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 1월 ～ 2022년 12월(3년)

○ 위 치 : 완주군 상관면 신리 665번지 일원

○ 규 모

- 면    적 : 75,000㎡

- 사업내용 : 기반시설 조성 및 교육프로그램 운영 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  7,630백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	7,630		1,836	3,333	2,461
국 비	4,500		1,102	2,000	1,398
시 도 비	750		183	333	234
시군구비	2,250		551	1,000	699
지 방 채
민간자본	130				130
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 새원복합어울림센터 공공건축 기획설계용역 중(`20.8월~)

○ 골목길 정비 및 역사거리 조성 실시설계용역 중(`20.11월~)

○ 집수리지원사업 신청서 접수 및 건축설계용역 발주(`21.8월)

□ 향후계획

○ 골목길 정비 및 역사거리 조성 실시설계용역 완료(`21.10월)

○ 새원복합어울림센터 건축 실시설계용역 완료(`22.3월)

사업명

산림에너지 자립마을 조성사업

담당자

산림녹지과

김종덕(☎290-2712)

□ 사업목적 및 필요성

○ 에너지 취약지역인 산촌의 풍부한 산림바이오매스를 활용하여 난방과 전기를 생산·공급하는 에너지자립시스템 구축

○ 저가 난방·급탕온수 공급으로 주민 생활의질 개선 및 관내 버려지는 산림부산물 자원화 이용으로 산불, 조림사업 장애물 제거, 생활권 산림경관 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 03월 ～ 2021년 12월( 1년 10개월)

○ 위 치 : 완주군 화산면 화평리 575번지 일원(대평,상고성,하고성,신공개마을)

완주군 고산면 오산리 산43-1(고산자연휴양림) 일원

○ 규 모

-마을단위 70kW 열병합발전시설 및 400kW 우드칩보일러 중앙열공급시설 설치

-수목부산물 수집·운반·파쇄·선별·건조 기반시설 조성 및 임업기계장비 장비구입(산림바이오매스에너지 연간 1만톤 생산 규모)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,439	13	2,146	2,280
국 비	2,213		1,073	1,140
시 도 비	664		322	342
시군구비	1,562	13	751	798
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 산림청 공모사업 선정                                   : 2020.3.3.

○ 주민 사업설명 및 발전시설 벤치마킹                     : 2020.3.19.

○ 지방재정 투자심사                                      : 2020.4월

○ 산림에너지자립마을 기본 및 실시설계용역 시행           : 2020.9월

□ 향후계획

○연료공급시설 및 생산시설 사업 완료                      : 2021. 12월

사업명

2020 전라북도 사회적경제 박람회

담당자

사회적경제과

유미화(☎290-2482)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사회적경제 1번지 완주군의 성과와 비전 공유, 사회적경제에 대한 지역  인식 제고 및 사회적가치 확산

○ 사회적경제조직 제품·서비스 홍보 및 판로 개척

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 9월 ～ 2020년 9월(1개월)

○ 위 치 : 완주군청 일원

○ 규 모 : 2020 전라북도 사회적경제 박람회 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	100		100
국 비
시 도 비	50		50
시군구비	50		50
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 미개최)

○ 코로나19로 인한 박람회 미개최                           : 2020. 10월

사업명

와일드&로컬푸드축제

담당자

문화관광과

김정아(☎290-2622)

□ 사업목적 및 필요성

○ 완주의 자연·생태문화가 지닌 야생성과 지역에서 나는 안전한 먹거리인 로컬푸드를 접목해 건강한 완주를 전국에 알리는 계기 마련

○ 지역주민들이 주도하는 주민참여형 축제 운영으로 지역화합과 소통의 장 마련은 물론 지역경제 활성화를 도모하는 생산적인 축제 추진

○ 관람형 축제가 아닌 모든 계층이 직접 체험하고 즐기는 참여형 축제로 타 축제와 차별화되는 축제기획으로 ‘문화관광 축제’로 도약하는 계기 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ∼ 2023.(연례반복행사)

○ 위 치 : 완주군 고산자연휴양림 및 완주군 일원

○ 규 모 : 와일드&로컬푸드축제 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	132		132
국 비
시 도 비	70		70
시군구비	62		62
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 미개최)

○ 코로나19로 인한 축제 미개최                             : 2020. 8월

사업명

완주군민의날

담당자

행정지원과

구본국(☎290-2252)

□ 사업목적 및 필요성

○ 제56회 군민의 날을 맞이하여 사회 각계 각층의 전 군민이 참여하는 가운데 공감과 소통으로 다함께 열어가는 으뜸도시 완주을 건설하기 위한 범군민적 의지를 한데로 모아 화합과 축제의 행사로 품격있게 추진

○ 지역발전에 기여하고 군민의 명예와 완주군을 빛낸 유공자를 선발하여 완주군민 대상을 수여함으로써 「다함께 열어가는 으뜸도시 완주」건설을  위한 귀감으로 삼고 전체 군민이 경축하고 화합하는 행사로 실시 하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 매년 5월(2021년 5월 12일(1일))

○ 위 치 : 완주군 삼례읍 삼례공설운동장 일원

○ 규 모

-참여인원 : 5,000여명

-내    용 : 기념식, 상생화합퍼포먼스, 민속경기(체육행사), 군민화합한마당

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  120백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	120			120
국 비
시 도 비
시군구비	120			120
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 미개최)

○ 코로나19로 인한 축제 미개최

사업명

완주군 새마을회관 건립

담당자

행정지원과

배정훈(☎290-2255)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국가와 지역 사회 발전에 헌신 봉사해 온 새마을지도자들의 사기 진작

○ 새마을 정신을 토대로 마을과 지역사회 공동체를 형성하여 새마을운동의 지속가능한 활동과 자립기반을 조성하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 1월 ～2023년 12월(3년)

○ 위 치 : 완주군 삼례읍 수계리 204-5

○ 규 모 : 지상 2층,  대지면적 : 830㎡ , 연면적 : 595㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,500		138	640	1,722
국 비
시 도 비	300				300
시군구비	1,500			78	1,422
지 방 채
민간자본
기 타	700		138	562

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2018. 02. : 새마을중앙회에 “완주군 새마을회관건립 계획안”제출

○ 2018. 08. : 새마을회관건립추진위원회 발족

○ 2018. 10. : 제1차 새마을회관건립 기금모금 실시

○ 2019. 09. : 제2차 새마을회관건립 기금모금 실시

○ 2020. 05. : 새마을회관 건립계획 수립

○ 2021. 08. : 새마을회관 건립 기본 및 실시설계용역 실시

□ 향후계획

○ 2021. 12. : 새마을회관 실시설계 완료

사업명

완주군 교육지원센터 조성

담당자

교육아동복지과

최슬기(☎290-2289)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌교육활성화를 위한 거점공간 마련으로 도·농간 교육격차 해소 및인구 유출 예방하고자 함

○ 지역 내 산발적으로 위치해 있는 교육관련 시설들을 통합 운영하여 이용객들의 접근성을 높이고 교육 프로그램 및 대상자에 대한 통합 관리로 양질의 교육혜택을 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 3월 ～ 2022년 12월(2년 9개월)

○ 위 치 : 완주군 봉동읍 구미리 987-1번지 일원(舊.청완초등학교)

○ 규 모

- 부지면적 15,022㎡, 건축면적 2,019㎡(리모델링)

- 1층(10실 : 유치원, 도서실, 교무실, 과학실, 식당), 2층(10실 : 교실)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,200			1,000	4,200
국 비
시 도 비
시군구비	5,200			1,000	4,200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 완주군-교육지원청 협의 (2020.1.)

○ 공유재산관리계획 심의 (2020.3.)

○ 부지 매입 (2021.3.)

□ 향후계획

○ 건축기획용역 (2022.1)

○ 건물 안전진단 및 실시설계 용역 (2022.3.)

○ 건물 리모델링 (2022.8.)

사업명

완주테크노밸리 제2일반산업단지

연구용지매입

담당자

일자리경제과

이재혁(☎290-2412)

□ 사업목적 및 필요성

○ 완주형 그린뉴딜을 위한 각종 사업추진(국가예산 확보) 및 기관, 기업 등 유치를 위한 완주군 소유 유휴부지 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 1월 ～ 2024년 12월(4년)

○ 위 치 : 완주군 봉동읍 완주테크노밸리 제2일반산업단지 연구용지

○ 규 모

- 완주테크노밸리 제2일반산업단지 연구용지(13필지)

: 103,341㎡(31,315평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  22,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	22,600		300	7,400	14,900
국 비
시 도 비
시군구비	22,600		300	7,400	14,900
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 연구용지 일부매입                                  : 2021.3월

□ 향후계획

○ 잔여 공공용지 매입 완료 및 등기이전                : 2024.10월

사업명

완주소셜굿즈 혁신파크조성(재심사)

담당자

사회적경제과

오상혁(☎290-2483)

□ 사업목적 및 필요성

○ 양질의 사회적 일자리를 창출하고 포용성장을 견인하는 사회적 경제 활성화(국정과제 26번)를 위한 혁신 집적 공간 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 8월 ～ 2021년 8월(12개월)

○ 위 치 : 완주군 삼례읍 삼례리 182번지 일원(삼례중학교)

○ 규 모 : 부지 23,744㎡,  리모델링 건물 6개동/연면적 4,553㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,900		1,300	3,300	1,300
국 비	1,000			1,000
시 도 비
시군구비	2,900		1,300	300
지 방 채	2,000			2,000
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 수요자 중심의 공간구성을 위한 공간기획단 운영      : ‘21. 1월 ~ 3월

○ 원가심사 및 공사 발주                              : ‘21. 6월말

○ 공사계약 및 착수                                   : ‘21. 7. 30.(금)

○ 소셜굿즈센터 임시이전(삼례중→우석대)               : ‘21. 8. 10.(화)

□ 향후계획

○ 관급자재 요청 및 공사 추진                         : ‘21. 8월 중

○ 운영조례 제정 및 입주자 모집공고                   :′21. 8월~11월

○ 공사완료 및 운영                                : ′21. 12월

사업명

완주로컬푸드 부가가치발효산업

육성사업

담당자

먹거리정책과

박가람(☎290-2687)

□ 사업목적 및 필요성

○ 발효 원료농산물 생산농가 조직화 및 계약재배 실현

○ 유통 채널별 발효제품 개발 및 상품화, 신소재 개발 등

○ 원료 농산물 대량 소비를 위한 발효시설 구축으로 농업인 소득 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 1월 ～ 2024년 12월(4년)

○ 위 치 : 완주군 비봉면, 소양면 일원

○ 규 모

- 원료 농산물 생산농가 조직화 및 공급체계 구축 (4품목:상추, 양파, 마늘, 콩)

- 발효시설 구축 (발효·숙성탱크, 실험 장비 등)

- R&D (발효공정 개선 2식, 신제품 개발 2건)

- 홍보 및 마케팅 : 로컬 타깃 대상 홍보, 홈쇼핑 등 대량판매·온라인 유통 채널 확보

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000			700	2,300
국 비
시 도 비	1,500			350	1,150
시군구비	1,500			350	1,150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 운영·실무추진·자문위원회 운영(23회)                     : ‘21. 1~6월

○ 농가 조직화 및 협력마인드 함양 교육(7회, 105명)         : ‘21. 4~5월

○ 발효원료 공급(20농가, 289백만원)	: ‘21. 1~8월

- 3품목, 223.61M/T(상추 206.35, 콩 3, 콩나물 14.26)

○ 분석장비 3식 설치[분광광도계, 산화질소 분석장비(HPLC, NOA)] : ’21. 6.

○ 완주군 발효산업 시장조사 전략 수립 완료	: ‘21. 7.

□ 향후계획

○ 발효·숙성탱크 및 기타 장비(필터, 터보블로워 등) 설치 진행  : ‘21. 8월~

○ 유통마케팅 분석으로 브랜드 개발 및 아이덴티티 구축     : ’21. 8월~

○ 발효기간 단축 연구 및 상품개발(젤타입, 스틱상품)         : ‘21. 8월~

사업명

완주군 보은매립장 침출수 방재시설

설치사업(재심사)

담당자

환경과

정경모(☎290-2894)

□ 사업목적 및 필요성

○ 보은매립장 침출수 외부유출 차단 및 발생하는 침출수 수질수치 저감을 위한 시설조성을 통해 안전하게 침출수를 처리하여 주변 환경오염을 방지하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 8월 ～ 2021년 9월(1년)

○ 위 치 : 완주군 비봉면 백도리 산90-1일원

○ 규 모

- 가스포집 등 안정화 시설(덮개) : 41,576㎡

- 오염수 차집관로 매설 및 차단벽 : 302m, 3,260㎡

- 침출수전처리시설 설치 : 80㎡/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  9,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,800	1,000	3,100	5,700
국 비
시 도 비
시군구비	9,800	1,000	3,100	5,700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 전처리시설 특허공법 선정                                  : ‘21. 01. 27.

○ 기본 및 실시설계 완료                                     : ‘21. 04. 26.

○ 전처리시설 설치공사 발주                                  : ‘21. 07. 20.

○ 차수벽설치공사 준공                                       : ‘21. 08. 26.

□ 향후계획

○ 전처리 시설 공사착공                                     : ’21. 08. 31.예정

사업명

용진설경~두억 도로확포장공사
(재심사)

담당자

도로교통과

이지웅(☎290-2792)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주민들이 이용하는 주요도로로 도로폭이 협소 및 노후로 교통사고 우려가 상존하고 있고 통행하는 주민들의 도로이용 불편해소

○ 군도13호선으로 지정된 도로개설로 사회기반시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 1월 ～ 2023년 12월(8년)

○ 위 치 : 완주군 용진면 간중리 산 141-1번지 일원

○ 규 모

- 기존 : 도로개설  L=2.0km,   B=6.0m

- 확장 : 도로개설  L=1.9km,   B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,200	100	500	300	4,300
국 비
시 도 비
시군구비	5,200	100	500	300	4,300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 실시설계 용역                                    : 2016. 2월 ~ 2016. 12월

○ 토지 및 지장물 보상                              : 2020. 1월 ~ 2022. 12월

□ 향후계획

○ 공사 추진                                        : 2022. 1월 ~ 2023. 12월

사업명

이서 제남선 도로확포장공사(재심사)

담당자

도로교통과

이지웅(☎290-2792)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주민들이 이용하는 주요도로로 도로폭이 협소 및 노후로 교통사고 우려가 상존하고 있고 통행하는 주민들의 도로이용 불편해소

○ 리도206호선으로 지정된 도로개설로 사회기반시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 1월 ～ 2023년 12월(8년)

○ 위 치 : 완주군 이서면 갈산리 175번지 일원

○ 규 모

- 도로개설  L=2.0km,   B=8.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,300	600	500	200	4,000
국 비
시 도 비
시군구비	5,300	600	500	200	4,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 실시설계 용역                                    : 2016. 2월 ~ 2016. 12월

○ 토지 및 지장물 보상                              : 2018. 8월 ~ 2022. 12월

□ 향후계획

○ 공사 추진                                        : 2022. 1월 ~ 2023. 12월

사업명

구이 저수지 둘레길조성사업

담당자

공영개발과

정상만(☎290-2852)

□ 사업목적 및 필요성

○ ‘63년 농업지원 담수용 저수지기능으로 축조(57년 유지)이후 기능감소

○ 광역전주권 휴양기능확충과 모악산관광기능 증대(‘19년관광객 : 270만명)

○ 수변에 연한 둘레길 개설이후 지역주민편익증진과 이용객 매년 증가에 따른 저수지주변의 힐링과 관광여건 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 1월 ～ 2023년  12월(3년)

○ 위 치 : 완주군 구이면 원기․덕천․항가리 일원

○ 규 모

- 수변데크 설치  L=1.3km

- 화장실 설치 2개소 1개당 50㎡ 등 부대시설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000			200	2,800
국 비
시 도 비
시군구비	3,000			200	2,800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 구이저수지 둘레길 부대시설 조성(운동기구, 분리수거대 등)        : 2021. 3월

○ 구이저수지 화장실 보수 등                                      : 2021. 5월

□ 향후계획

○ 구이저수지 화장실 설치                                        : 2021. 12월

사업명

어린이안전교육종합체육관조성

(재심사)

담당자

재난안전과

주재형(☎290-2916)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어린이가 위험상황에 처해 있을 때 대처능력 및 요령을 습득할 수 있는 체험 교육 환경 제공으로 어린이 안전사고 사전 예방

○ 관내 어린이 안전체험관 부재에 따른 임실 및 군산 등으로 원거리 이동 교육 시행으로 경제적, 시간적 부담 가중

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 4월 ～ 2022년 10월(3년 6개월)

○ 위 치 : 완주군 고산면 소향리 162-2번지(전통문화체험센터 부지)

○ 규 모 : 체험관 975㎡(2층) (연면적)

- 실내 체험시설 : 각종 자연재난 및 사회재난 체험시설

- 야외시설 : 각종 교통안전 체험시설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,900	600		700	2,600
국 비
시 도 비
시군구비	3,900	600		700	2,600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 어린이 안전교육 종합체험관 실시설계용역 실시                  : 2020. 12월

○ 어린이 안전교육 종합체험관 실시설계용역 납품                  : 2021. 6월

○ 계약심사 및 일상감사 의뢰                                     : 2021. 8월

○ 공용건축물 건축협의 요청                                       : 2021. 8월

○ 공유재산심의                                                  : 2021. 8월

□ 향후계획

○ 건축 발주                                                     : 2021. 9월

10-2. 지방채 발행사업

우리 완주군에서 ‘20년에 추진한 지방채발행 사업현황은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 완주군에서 ‘20년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2020년	2021년	2022년 이후
BTL	완주BTL	완주 흰여울(주)	90,892	46,084	5,241	5,321	44,088	2011 ~ 2030
BTO	전라북도 환경기초 시설건설 및 운영 민간투자사업	㈜전북 엠비텍	92,573	48,102	5,253	5,500	33,718	2018 ~ 2028

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2020년까지는 집행액(결산기준), 2021년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황(별첨 가능)

※ 사업별로 서식(예시)에 따라 사업별 1장씩 별지 작성

※ 작성요령은 투자심사사업에 준하며, 총사업비, 최소수익보장 등 계약조건, 지금까지 임대료 및 운영비 부담액, 향후 부담예정액, 계약조건변경 사항 등을 필히 기재

개별 민간투자사업 현황

사업명

완주군하수관거정비임대형민자사업(BTL)

담당자

상하수도사업소 임정식

(☎290-3395)

□ 사업목적 및 필요성

○ 민간투자사업으로 조성된 하수관거 시설의 효율적인 관리

□ 사업개요

○ 기    간 : 2011~2030        ○ 위    치 : 고산, 소양, 구이, 고산

○ 민간사업자 : 완주흰여울(주)

○ 총사업비 : 90,892백만원      ○ 사업규모 : 하수관거 L=74.44km

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	90,892	46,084	5,241	5,321	44,088
국 비	63,336	31,470	3,044	3,044	30,862
시 도 비	2,726	1,355	130	130	1,323
시군구비	24,830	13,259	2,067	2,147	11,903
기 타

□ 추진단계

○ 운영중

□ 향후계획

○ 2030년 운영(임대) 종료

사업명

전라북도 환경기초시설 건설 및 운영 민간투자사업

담당자

상하수도사업소 임정식

(☎290-3395)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼례, 소양, 구이, 고산지역 주민의 공중위생 향상 및 만경강 수질보전을 위해 공공하수처리시설 건설 및 운영시행

□ 사업개요

○ 기    간 : ‘08.06.~’28.06.   ○ 위    치 : 삼례, 소양, 구이, 고산

○ 민간사업자 : ㈜전북엔비텍  ○ 총사업비 : 92,573백만원

○ 사업규모 : 공공하수 4개소(34,200㎥/일)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(‘08.06.~’28.06. 20년간 운영관리 시행)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	92,573	48,102	5,253	5,500	33,718
도 비	5,060	2,783	253	253	1,771
군 비	87,513	45,319	5,000	5,247	31,947

□ 추진단계

○ 운영중

□ 향후계획

○ 2028년 6월까지 지속 운영